청주산단 스타트업센터 및 복합문화센터 입찰관련 질의응답서 모음집

No	질의내용	답신내용	비고
1	도면 : 공장동 지붕 경질우레탄판넬 THK260 생산안됨. A-110(횡단면도-1)	“글라스울 판넬”로 변경하여 공내역서 제공
2	1. 철골자재 집계 : 106.081톤 2. 철공가공조립(적은구조) : 75.223 ※철골자재수량과 철골가공 조립수량이 상이(내역서)	철골가공조립(적은구조)은 공장동 75.223이 맞고 나머지는 부대 철골 집계 합산임.
3	가시설도면 및 내역이 없음(지하층 굴착깊이 H=-8,500)	지하층 터파기시 주변 대지가 여유가 있어 오픈컷공법 적용
4	지질조사보고서 배부요함 - 파일 항타관련	지질조사보고서 배부함
5	도면 선홈통 Φ150*1.2t, 스테인리스관으로 설계(A-501~505) 되었으나, 내역서는 125mm*1.2t, 스테인리스관으로 설계(내역 P10)	내역서 기준으로 견적제출 요망, 도면 수정하여 배포하겠음
6	공장동 선홈통도 벤처동 동일 설계 및 내역 작성(도면 및 내역서 상이)	내역서 기준으로 견적제출 요망, 도면 수정하여 배포하겠음
7	Φ150으로 시공시 루우프드레인도 바뀌어야 함.	내역서 기준으로 견적제출 요망, 도면 수정하여 배포하겠음
8	스테인리스핸드레일/A1,A2,3로 설계(A-901.1), 내역서상 규격 도면과 상이함(내역서 P11)	내역서 기준으로 견적제출 요망, 도면 수정하여 배포하겠음
9	편의시설(장애인)관련 난간류 내역서 누락 -경사로 및 내부 벽부형 (높이도 규정도 도면대비 내역서 상이함)	도면 기준으로 견적제출 요망.
10	폐기물처리물량 : 약 392.0톤으로 발주처 직접 발주처리 (100톤 이상의 경우 분리발주가 원칙)	분리 발주로 발주처에서 별도 발주할 예정임.
11	도면 및 공내역서. 시방서상의 상호 상이시 설계변경 가능여부	본 입찰은 도면입찰로 향후 공사비 변동 불가, 공사비 변경관련 설계변경은 필요시 사안에 따라 발주처에서 판단함.
12	안전관리계획서 작성 제출 및 승인서(작성 및 제출 적격승인 최소 45일 소요) 착공계에 첨부	업체 확인결과 작성기간 10일 정도, 검토기간 2주 소요 ※빠른시일내 준비하여 2024년 7월중으로 착공 목표
13	설계비 책정 기준(내역표기항목?) 내역서 표기내용 외 가시설공사 관련내용 포함여부	오픈컷 공법으로 가시설공사 없음.
14	건물 준공청소 항목 누락	준공청소 비용 견적제출 요망
15	토공관련 사토운반이 아니고 순성토반입이 타당	순성토 반입으로 반영하여 견적 제출 요망

No	질의내용	답신내용	비고
16	벤처동 공내역서 상 알루미늄창호 관급자관급자재로 되어있는데 견적포함 여부	알루미늄 관급자재로 견적제외 요함.
17	배포자료에 지질조사서 없는데 파일수량은 내역서 제시한수량대로 견적하는지 여부	내역서 제시한 수량만 견적에 포함.
18	공장동 파일공사중 파일항타수량 3,052m 맞는지 여부	내역서 수량 변경 공내역서 수정 제공
19	공장동 파일공사중 파일항타(공파일)수량 696m 맞는지 여부(지하층없음)	내역서 수량 변경 공내역서 수정 제공
20	EGI휀스는 내역서상 78m로 전면부분만 설치하는것으로 견적이 맞는지 여부	전면도로만 설치
21	세륜기설치 여부(허가조건확인)	허가 진행중이며, 세륜기 설치내역 반영 필요
22	공장동 지붕 THK260경질우레탄판넬(심재준불연) 맞는지 여부(기성품없음)	글라스울 판넬 변경 공내역서 제공
23	미장벽돌 사이즈 내역서상의 240이 맞는지 여부	240X90X57 매수 134024 임.
24	점토벽돌 자재는 품질별로 가격차이가 큰데 어느 수준의 제품으로 견적하는지?	설계 견적서 공개하겠음.
25	벤처동 홀 천정루버 사이즈 상이( 내역서 : 30*120@150 / 도면 : 60*300@300)	내역서 제시한 루버로 견적서 제출, 추후 도면 수정
26	벤처동 지하홀 복도 단열재 부착부분 마감 없음	석고보드 1P치고 친환경페인트 마감으로 견적 제출
27	벤처동 지하홀복도 천정마감 상이(단면도 : 흡음텍스 / 실내마감표 : 콘크리트면처리)	흡음텍스 마감으로 반영 및 추후 실내마감표 도면 수정
28	벤처동 방수공사내역중 침투방수 수량 있으나, 도면상 침투방수위치 불분명	내역도면 수량만 반영, 추후 상세 반영도면 수정
29	벤처동 남녀화장실 간벽 시멘트벽돌 높이 (단면상 : 천정까지만있음)	화장실 사이벽 천정까지만 견적 제출.
30	벤처동 음향실 벽체마감 상이 (실내마감표 : 미장+도장 / 단면도A-215 : 라인타공 흡음판)	라인타공 흡음판으로 내역 반영, 추후 도면 수정

No	질의내용	답신내용	비고
31	벤처동 지하층바닥 마감 상이(내역서 : 에폭시코팅 / 상세도A-117 : 에폭시 라이닝)	에폭시코팅으로 견적 제출, 추후 도면 수정
32	벤처동 전기실 기계실 천정마감 상이(내역서 : THK 10 / 단면도상 : THK5)	내역서 THK.10 반영, 추후 도면 수정
33	벤처동 18인 승강기 1~2호기 사이에 평면도상 건식벽체 표기되어있는데 견적에 포함해야 하는지 여부	견적 제외 (철골공사로 엘리베이터 공사분)
34	벤처동 단면도 A-215 복합문화공간 천정 "그리드아이언" 견적포함 여부	견적 반영(공연보다는 전시 위주로 최소 반영)
35	공장동 바닥마감 기계미장 후 별도 마감 없는지?	에폭시코팅으로 견적에 포함하여 제출을 요함, 추후 도면수정
36	철근강도 표기상이(기초도면 옆 Note : SD400 / 도면 : SD500)	철근강도 SD400으로 제출, 추후 도면 수정
37	가설울타리/E.G.I철판(H:2.4M) 공내역 78M는 설치 높이도 낮으며 인접대지 물량보다 적음. 반영하여 견적하는지 분진,소음등 민원발생으로 추후 설계변경 하는지 여부.	전면도로만 설치
38	층고 4.2m이상에서는 시스템동바리를 적용해야하나 공내역은 일부 강관동바리로 산출 견적 반영 여부.(V5강관동바리 인증받은 제품 구하기 어려움)	1층 오픈공간만 시스템동바리 적용 5m 이하는 강관 동바리 적용
39	공내역상 가시설흙막이 미반영 인접대지,담장 현장여건에 따라 필요성 적용 여부.	대지가 여유가 있어 오픈컷 공법 적용
40	공장동 파일항타 및 공삭공 파일 본수 대비 과대수량 오류 확인 및 견적 적용여부.	지질조서서 및 공내역서 수정 송부
41	지반지질조사서 정확한 파일길이 산정 견적을 위해 배포 여부 및 공내역 기준 견적반영 확인.	지질조서서 송부
42	문화센터동 로비 출입구 철골 구조도면 설계 공내역 미반영 견적 반영 여부 확인.	공내역서 수정 송부
43	공장동 철골(형강,강판) 공내역 자재 수량 대비 가공조립 수량 적음(자재수량도 약10톤 차이남) 공내역 기준인지 도면 견적 기준인지 확인.	공내역 기준으로 견적서 제출

No	질의내용	답신내용	비고
44	미장벽돌 공내역상 사이즈 규격 240 맞는지 일반적인 치장벽돌인지 지정 제품이 있는지 확인 요망.	품질 확보를 위해 조적견적서 송부
45	포천석 자재가 국내석인지, 수입석(중국석 외)인지 적용 여부 확인.	국내석 기준으로 견적서 제출
46	공내역상 선홈통 루프드레인 125mm이고 도면 150mm인데 어느것으로 견적?	공내역서 견적서 반영, 추후 도면 수정
47	도면은 스테인레스 각관A타입 난간인데 공내역은 원형 타입으로 상이 견적 적용 타입 확인.	공내역서 견적서 반영, 추후 도면 수정
48	로비 홀 2층 기성제미려핸드레일 난간 벽부형 제작불가 상단 고정형 견적 반영.	도면 기준으로 견적서 제출
49	장애인편의시설 관련 시설물 공내역 미반영 견적 반영 여부 확인.	도면 기준으로 견적서 제출
50	강재창호 공내역은 단열, 방화, 일반 기준 구분없이 ㎡당 수량 반영했고, 도면은 종류별 분리함. 어떻게 견적 반영하는지 확인 바람.(성능별 단가 다름)	도면 기준으로 반영
51	FSD/3 사이즈3100*2400으로 설계 단열창호는 최대2400*2400 견적 반영 확인.	도면 기준으로 견적서 제출
52	로비2층 단면도 Y2~Y1r구간에 방화셔터 표기되어있으나 참호 일람표 미표기 견적 반영 여부 확인.	견적서 반영 제출
53	공장동 내화페인트 도면, 내역 기준 2시간 견적시 100% 시공 견적인지 확인.(금액적으로 차이가 큼)	내화 페인트 2시간 기준 적용
54	설계도면과 공내역 물량 차이가 다소 있어 최저가 견적이 애매하여 적절한 기준이 있어야 된다고 판단됨.(입찰전 공내역 기준인지 질의응답을 통한 기준인지 여부확인)	질의 응답을 기준으로 작성
55	24.06.12 현장설명회 장소에서 ES물가변동 계약변경이 가능하다는 답변이 나왔는데 확실히 반영되는지 안되는지 여부 확인.(입찰 견적 반영에 중요하다고 판단됨)	ES 물가 변경계약 변경 불가 (홈페이지 공지사항 참조)