붙임 3		공사시방서

청주산단 복합문화센터 무대설비 보완공사

공  사  시  방  서

2026. 1.

복합문화센터 다목적홀 무대 보완공사 시방서

1. 공 사 명 : 청주산단 복합문화센터 다목적홀 무대 보완공사

2. 공사기간 : 착공일로부터 12일 이내

3. 공사장소 : 충북 청주시 공단로126번길 51, 청주산단 복합문화센터 다목적홀

4. 공사내용

가. 아트커넥트홀(1층 다목적홀)

○ 공사기간 : 11일 이내

○ 공사건명

- 무대 보완공사 : 바닥 하지틀 공사, 바닥 합판작업, 마감 작업

- 조명 보완공사 : 파조명, 미니엘립소이드, 콘솔박스

나. 2층 외부공연장(데크) 차양막

○ 공사기간 : 1일 이내

○ 공사방법

- 공연무대 차앙막 설치 : 수동어닝 설치공사

5. 공사의 일반사항

1.1 공사건명 : 다목적홀 무대 보완 및 조명장비 보완공사

1.2 적용범위

본 시방서는 청주산단 복합문화센터 1층 다목적홀(아트커넥트홀)의 무대 및 조명장비, 외부기기 설치와 관련된 공사의 일반적인 공통사항과 특기사항 등 기술적인 사항에 적용한다.

1.3 공사의 범위

1.3.1. 무대 확장공사(합판, 하지틀 등) : 72㎡ 정도

1.3.2. 무대 조명장치 보완공사(파조명 10EA, 미니엘립소이드 4EA)

1.3.3. 감독관 지정 장소까지의 운반 및 납품 하차도(공사현장 설치)

1.3.4. 무대 조명장비(콘솔박스)의 제어반 및 조작반 제작 및 납품

1.3.5. 무대 확장관련 자재 및 조명장비의 제작 및 납품

1.3.6. 납품기기의 성능, 하자 보장책임 및 보전에 필요한 제반 행위

1.3.7. 시운전 및 교육

1.6.8. 무대 전동커튼 이전설치 및 기존 무대장치와의 호환성 작동 조치사항

1.4 납품 및 검사

1.4.1 무대 및 무대 조명장비의 납품시 발주처 감독원 입회하에 동등 이상의 성능에 대한 승인을 득하여야 한다.

1.4.2 납품 완료 후 발주처 담당자의 입회하에 조명기기 운전을 실시하여야 하며 인수인계는 서면으로 하며 감독관의 승인을 득하여야 한다.

1.4.3 무대 및 조명장비의 사용설명서를 발주처 및 시설관리자에게 제출하여 기기 등의 조작 및 사용에 불편함이 없도록 하여야 한다.

1.4.4 계약자가 납품하는 모든 제품은 가급적 국내 기업이 생산한 제품으로 발주처 요구성능 조건 및 물품 규격서를 100% 만족시키는 정품, 완제품으로 공급하여야 하며, 주요 구성품 부품 또한 제조사의 정품만을 사용하여야 한다.

1.5 자격기준

무대공사 및 조명장치 설비의 완벽한 시설 설치공사와 하자 보수, 시스템 점검 및 교육 등을 고려하여야 하며, 시공자는 건설산업기본법에 따른 실내건축공사업 면허를 소지한 업체여야 한다.

1.6 계약자 선정 방법

무대 및 조명장치 설비의 완벽한 시설을 위해 물품의 지정규격 이상의 성능과 규격 등을 갖춘 제품에 대하여 예정가격 이하 최저가격 견적서 제출자를 낙찰자에 선정함.

1.7 착공시 제출자료

선정된 공사업체는 다음의 서류를 제출하고 시방서에 따라 계약기간 내에 납품 및 설치공사를 완료하여야 한다.

1.7.1 착공시 제출서류

① 착공계 및 세부 산출내역서

② 예정공정표

③ 안전관리계획서

④ 사용자재(기기)의 품질 및 규격, 스펙 등을 확인할 수 있는 증빙서류

⑤ 현장대리인 지정계, 공정별 인력 및 장비 투입계획서

⑥ 착공 전 현장사진

1.7.2 공사 완료 후 제출서류

공사 준공시 제출서류는 아래 내용과 같이 한다.

① 준공계 및 준공검사원

② 준공내역서

③ 자재 및 부품, 기계설비 등의 시험성적서(성능 보증 또는 인증서)

④ 산업안전보건관리비 지출 증빙내역서 및 관련 사진대지

⑤ 공사 전/중/후 각각의 사진을 촬영한 사진대지

⑥ 기계설비 및 장치 등의 유지관리 지침서(사용설명서)

1.7.3 대가 청구시 제출서류

① 대가 청구 공문 및 준공금 지급청구서(소정양식)

② 전자세금계산서

③ 통장사본

④ 국세 및 지방세 납부증명서

⑤ 산업안전보건관리비 정산 후 준공내역서

⑥ 하자보수보증서(보험증권)

- 계약금액의 5% 해당액으로 보증기간은 발주처의 준공검사 승인일로부터 2년간으로 한다.

1.8 공사 계획서

1.8.1 계약자는 입찰공고 및 내역서, 시방서를 준수하여 시공 및 납품하여야 한다.

1.8.2 시방서의 표기 방법이 불명확하거나 이의가 생겼을 때에는 발주처의 해석을 우선으로 하고 그 외에는 전기 내선규정 혹은 건축설비공사 표준시방서를 준용한다.

1.8.3 본 건은 납품 및 시운전 등을 포함한다.

1.8.4 본 공사에 대한 관계법령과 상이한 부분이 있을 경우에, 관계법령에 따라 시공 및 납품해야 하며, 계약기간 중 관계법령이 개정된 경우에는 개정되는 법령에 따라 변경하여 시공 및 납품해야 한다.

1.9 준공 및 납품 완료

공사, 각 기기의 납품 및 시운전이 완료되면 필요한 자료를 제출하여 납품검사원 및 감독관의 입회 하에 시운전 및 종합검사를 실시하고 이상이 없다고 발주처가 판단하는 경우 준공 및 납품 완료로 간주한다.

1.10 자재 및 기기 등의 포장

모든 제품의 포장은 기름종이, 비닐, 철대, 각재를 사용하여 수송, 납품에 운전까지의 기간 동안 기기를 충격 및 외부 습도로부터 보호한다.

1.11 운반 및 납품

1.11.1 계약자는 물품 기기의 운반 및 납품에 책임을 부담한다.

1.11.2 모든 제작품은 완전 조립된 상태로 납품함을 원칙으로 한다.

(단, 완전 조립된 상태로 운반 및 납품이 불가능한 경우에는 분해하여 운반하며, 조립 시 계약자 책임 하에 조립을 한다.)

1.11.3 납품 장소는 차량 진입이 가능한 장소까지 하차하도록 감독관이 지정한다.

1.11.4 계약자는 물품 및 기기 등은 현장 개봉을 원칙으로 하여 검수 완료 후 먼지 등이 침입하지 않도록 재포장하고, 납품 검사 후 시건장치를 하여 보관할 책임이 있다. 또한, 공사 완료 후 인수인계 시까지 도난, 훼손, 분실 등 관리책임은 계약자에게 있다.

1.12 기기 및 재료

1.12.1 기기 및 재료(기자재)는 모두 신품으로 생산일로부터 1년 이내에 생산된 제품이어야 한다.

1.12.2 기자재에 사용되는 물품은 안전인증 관련(KC) 및 한국공업규격품(K.S표시품)을 사용하고, K.S 인증이 없는 기자재는 형식 승인품 또는 공산품 품질관리법에 의하여 품질검사에 합격한 제품을 사용한다. 단, 부득이 수입 대체품 등을 사용하여야 하는 경우에는 해당 생산국가의 품질 인증을 받은 제품을 사용하여야 한다.

1.12.3 K,S규정이나 시방서에 명기되지 아니한 사항은 감독관의 지시에 따르며, K.S표시품은 감독관의 승인을 받아 검사를 생략할 수 있다.

1.12.4 검사 및 시험 후 합격된 기자재는 지정장소에 보관하고 불합격된 기자재는 반출하여 합격품으로 보충한다. 또한, 자재 중 변질, 손상된 것이 발견될 경우에는 불합격품으로 처리한다.

1.13 재해방지 및 피해 대책

1.13.1 공사 중에 발생되는 계약자 소속 임직원에 대한 사고와 제3자에 대한 사고 및 피해에 대해서는 계약자가 민·형사상 모든 책임을 부담하며, 이를 미리 예방하기 위하여 계약자는 피고용인에게 필요한 모든 교육 및 지시를 작업 전에 시달하여야 한다.

1.13.2 납품 기기 및 장비 등이 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여 사고 및 재해방지에 만전을 기한다.

1.13.3 작업 중에 사고가 발생한 경우에는 그 즉시 응급조치를 취함과 동시에 계약자 책임으로 최단기간 내에 복구하여야 한다.

1.14 안전관리의 책임 및 부담

계약자는 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 등에 규정된 안전관련 규정 및 안전수칙을 준수하여야 하며, 특히 다음 사항을 유의하여야 한다.

1.14.1 화재, 도난 및 위험물 등의 취급

1.14.2 자재 관리, 정리 및 철거

1.14.3 안전모 등 안전용품의 착용, 불안전한 요인의 사전 제거 및 방지

1.14.4 공사 관련 계약자의 종사자 및 제3자에 대한 손해배상을 담보할 수 있도록 보험가입 등의 조치를 완료하여야 한다.

1.15 하자의 보증

1.15.1 본 공사에 대한 하자보증기간은 준공검사일로부터 2년으로 하고, 하자보증금률은 총 계약금액의 5%로 한다. 단, 기계장치의 경우 해당기기 생산업체의 보증기간을 하자보증기간으로 볼 수 있다.

1.15.2 공급자는 하자 보증기간에 천재지변, 불가항력, 기타 고의에 의한 원인을 제외하고는 무상 하자보증의 책임을 진다.

1.15.3 하자 보증기간 중 발생한 하자에 대해서는 계약자는 신속하게 수리 또는 교체하여 운영의 중단을 초래하지 않도록 하여야 한다.

1.15.4 계약자는 하자보증기간 이후에라도 발생되는 시스템의 결함 및 고장 등에 대하여 지속적으로 소요 장비 및 부품 교체가 가능할 수 있도록 A/S 대리점 연락처 및 벤더 명단 등을 제공한다.

1.16 공사기간 및 지체상금

본 계약의 공사기간은 계약 체결일로부터 총 12일(토, 일 포함) 이내로 하며, 이 기간이 만료될 때까지 계약자가 발주처에게 준공검사원을 제출하지 못하는 경우 1일 1000분의 1(0.1%)에 해당하는 지체상금을 부과할 수 있다.

1.17 계약보증금

본 계약에 대한 계약보증금률은 계약금액의 100분의 15로 하되, 발주처의 계약규정에 따라 계약보증금의 납부는 면제한다. 단, 발주처의 소정서식 “계약보증금 지급확약서”를 작성하여 발주처에 제출하여야 한다.

6. 기본사항

가. 본 공사는 특기시방서에 의하여 시공하되 본 시방서 이외의 사항은 국토교통부 제정 표준시방서(KASS) 및 각 공사관련 학회 제정 일반 표준시방서 및 현행 각종 법령의 기준에 맞도록 시행하고 그 외 의문이 제기될 경우에는 발주처의 해석과 지시에 따라야 한다.

나. 공사현장은 언제나 기기 및 재료 등을 깨끗이 정리정돈하며 통행의 불편이나 사고방지 및 예방 조치에 만전을 기하고, 작업 중 발생한 재활용품은 지정장소에 운반하고 폐기물 및 부산물 등은 계약자의 책임과 비용으로  외부로 반출하여 처리한다.

다. 본 공사에 사용되는 모든 자재는 KS제품을 사용하여야 하며 KS제품이 없는 경우는 형식승인품 또는 이와 유사한 동등품 이어야 한다.

라. 시공 중 기존 건축물과 기타 시설물에 피해를 입힌 경우에는 감독관에게 즉시 보고하고 지시에 따라 시공자 부담으로 원상 복구하여야 한다.

마. 공사 시공과정(시공 전·후 현황)과 시공 후의 보이지 않는 부분에 대하여 반드시 사진을 촬영하여야 하고, 공사 전･후 사진과 시공과정을 정리한 사진대지 1부를 부착한 사진첩을 제출하여야 한다.

바. 도급자는 건물 내 출입자들의 안전을 위하여 제반 안전 조치를 취한 후 시공하고 안전관리책임자를 배치하여야 하며 사고 발생시 모든 책임은 도급자가 부담한다.

사. 작업현장 내에서의 음주 및 흡연을 금하며 화재에 주의하여야 한다.

아. 공사가 완료된 후 주변을 정리 정돈하고 청소를 깨끗이 한 다음 준공검사에 임해야 한다.

자. 현장과 시방서의 내용이 서로 다르거나 명기가 없을 때, 의문이 생길 때는 즉시 감독관과 해당 작업의 착수 이전에 협의하고 그 지시에 따른다.

차. 안전사고의 예방

1) 시공자는 공사 착공 전에 복합문화센터 등 해당 건물의 상주 인원의 안전에 대비한 계획을 수립하고 감독관의 승인을 받은 후 공사에 임한다.

2) 현장대리인은 작업자들의 안전사고 및 화재 예방에 대한 경각심을 수시로 고취시키고 점검한다.

3) 용접 작업이 필요한 경우에는 미리 소화기를 배치하고 작업에 대한 과정을 감독관의 확인을 받는다.

7. 특기사항

가. 공사 및 부산물 운반

1) 공사 추진시 충분한 안전시설을 확보하여야 하며, 조명 설치작업 등 위험 작업의 경우에는 현장책임자 입회 하에 실시하여야 한다.

2) 부산물 및 폐기물 등은 모두 외부로 반출하고 허가된 업체를 통하여 처분하여야 한다.

나. 조명공사

1) 자재 및 제품

- 계약자는 내역서 및 시방서, 제품 규격서에 표기된 요구성능 이상의 자재 및 제품을 반드시 사용하여야 하며, 부득이 이를 변경하여야 하는 경우에는 감독관의 승인을 받아 동등 성능 이상의 KS규격 자재 및 제품을 사용하여야 한다.

- 자재 및 제품 등의 발주와 현장 반입시 감독관의 검수를 득해야 한다.

2) 시 공

- 시공 전 시공계획을 미리 감독관과 협의하여야 한다.

- 시공시 이음부 및 구조체와 맞닿는 다른 재질의 부분은 실리콘 코킹 등 수밀제를 사용하여 밀실하게 시공한다.

- 목재 등의 가공시 먼지 등 오염물질 발생으로부터 이용자 및 실내 보호를 위하여 외부에서 가공한 후 다목적홀 내에 반입하여야 한다.

- 조명 등의 설치시 기존 조명 거치대의 안전성 등을 검토한 후 설치한다.

- 무대 시공시 기존 무대의 바닥 지지강도를 고려하여 동등한 성능을 충족하도록 시공하여야 한다.

- 무대 확장에 따라 기존 무대 전동커튼을 확장된 무대의 위치에 적합하도록 이전설치 하여야 하며, 이전 설치 후에도 원활히 작동되어야 한다.

3) 안전관리

- 고소 작업 시 안전관리자를 배치하여 안전사고 방지에 최선을 다한다.

- 천장 작업 시 주변 작업자 외 인원을 통제한다.